【 붙임5 】

청계면사무소 청사 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

세무회계과, 윤영호, 450-5383

일반 현황	소 재 지	무안군
	인구 수	81,189명(2019.11.기준)
	공무원 수	738명 / 748명	현원/정원
	재정자립도	13.35%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1977				1,644			-			681		1/2
	본청	-				-			-			-		-
	의회	-				-			-			-		-
	기타(면사무소)	1977				1,644			-			681		1/2
	청사신축 필요성			노후화 및 협소한 공간으로 인하여 복합용도로서의 기능 필요
	사업기간			2020. 06. ~ 2021. 05.(1년)
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : X 설계･시공 분리 : O
	추정(예정)가격			4,000백만원				계약금액							낙찰율		%
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2021		3,780		-			1,200			1/2
	본청		-		-		-			-			-
	의회		-		-		-			-			-
	기타(면사무소)		2021		3,780		-			1,200			1/2

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	4,000					4,000
	당해연도(H)	158					158
	H+1	1,842					1,842
	H+2	2,000					2,000
	H+3 이후
	총사업비(백만원)
	1) 토지매입비		690			비고
	2) 설계비		158
	3) 감리비		33
	4) 공사비		3,739
	5) 기타부대비		70

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	타당성 조사	2019. 02.	적정	자체
	공유재산 관리계획	2019. 03.	완료	군의회
	투융자심사	2019. 06.	완료	전라남도
	중기재정계획	2019. 09.	반영	자체
	설계	2019. 09.	착수	자체
	착공	-	-	자체
	준공	-	-	자체