109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 무안군에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
청계사무소 신축	5,600	779	681	3,640	550	2022	2019	50
남악신도시 (오룡지구) 부지매입	11,173	-	11,173	-	-	2020	2019	100
구)무안고등학교 부지매입	2,176	-	2,176	-	-	2020	2019	100
청화대종사 기념사업	5,300	-	-	2,000	3,300	2022	2019	5
무안 문화원 건립사업	3,000	-	103	1,520	1,380	2023	2019	10
작은영화관 건립사업	1,690	-	69	1,621	-	2023	2019	10
무안군립도서관건립사업	4,000	-	105	3,025	870	2023	2019	10
남악신도시 체육시설부지매입	35,400	6,767	-	1,560	27,073	2024	2019	5
무안 노을길관광테마공원 조성사업	4,700	1,614	2,023	1,063	-	2021	2017	80
사교천 생태하천복원사업	9,976	262	6,603	1,975	1,676	2022	2018	30
청계3농공단지조성사업	15,200	15,200	-	-	-	사업 중단	2017	-
청계농공단지 기숙사 신축사업	4,800	3,500	1,300	-	-	2020	2018	100
무안 항공특화산업 단지 조성사업	44800	12,461	10,031	9,180	13,128	2022	2018	76
몽탄농공단지 공공폐수 연계처리 관로시설	3,193	180	400	1,300	1,313	2023	2019	18
무안군 화물자동차 공영차고지 조성사업	10,300	-	31	715	9,554	2023	2020	5
낙지골목 주변 대형버스 공영주차장 조성사업	3,400	-	-	600	2,800	2022	2019	50
가고싶은 섬 가꾸기 사업	4,000	-	42	2,358	1,600	2023	2018	20
도서종합 개발사업	3,875	472	896	631	1,875	2027	2018	50
무안 수산물 위판장 건립사업	3,500	-	3,337	-	-	2021	2018	100
어업지도선 전남217호 대체건조	2,318	-	2,318	-	-	2020	2018	100
도원지구 연안정비사업	2,500	77	528	1,895	-	2022년	2018	40
용정지구 연안정비사업	3,000	81	1,164	1,755	-	2022년	2018	70
가입지구 연안정비사업	3,400	206	123	1,700	1,371	2022년	2018	45
어촌뉴딜 300 (신월항)	5,000	1,750	2,250	1,000	-	2021	2018	70
마산~용정지구 연안정비사업	2,522	-	190	1,200	1,132	2023년	2019	30
곡지지구 연안정비사업	3,890	-	148	1,500	2,242	2023년	2019	25
어촌뉴딜 300 (닭머리항)	7,581	-	1,987	3,032	2,562	2022	2020	25
어촌뉴딜 300 (도리포항)	12,548	-	3,229	5,019	4,300	2022	2020	25
어촌뉴딜 300 (송현항)	11,555	-	2,980	4,622	3,952	2022	2020	25
어촌뉴딜 300 (영해항)	5,594	-	1,490	2,238	1,866	2022	2020	40
무안읍 전통시장 진입도로 개설공사	694	578	116	-	-	2020	2018	100
초의선사 탄생지~톱머리구간 해안관광 둘레길 조성사업	3,200	105	630	928	1,537	2022	2019	30
무안갯벌 생태문화체험 전시관 확충사업	3,798	3,020	778	-	-	2020	2017	100
무안갯벌 탐방다리 설치공사	9,800	-	262	1,970	7,568	2023	2019	3

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

청계면사무소 청사 신축공사

담당자

세무회계과 최문수(☎450-5382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대민서비스 및 수행에 필요한 행정 공간 확보

- 부지확보를 통한 주차공간 증설 및 주민 쉼터공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 무안군 청계면 도림리 489-5번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 3,830㎡, 연면적 1,372.14㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,600	779	681	3,640	500
국 비
시 도 비
시군구비	5,600	779	681	3,640	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료

○ 토지보상 완료

○ 기본 및 실시설계용역 완료

○ 각종 위원회 심의 및 군 계약심사 완료

○ 공사계약 및 착공

□ 향후계획

○ ‘21. 5. ~ ‘22. 3. : 공사추진 및 준공

○ ‘22. 4. : 청계면 신청사 업무개시

□ 사업변경 내역

구 분	당 초		변 경		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	39	연면적 1,198㎡	56	연면적 1,372㎡	연면적 증가
공사비	31		44
건축,토목,조경등	24.8		36.4
전기	3.9		5.4
통신	1.4		1.6
- 소방	0.9		0.6
보상비	4		6
용역비	2		3
기 타	2		3

사업명

남악신도시(오룡지구) 부지매입

담당자

세무회계과 최문수(☎450-5382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시 인구 급증으로 늘어나는 행정 수요에 다라 분읍에 대비하고       오룡지구 활성화에 따른 일로읍 출장소 운영 및 오룡지구 택지개발사업의       원활한 추진을 위한 청사부지 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2020.

○ 위 치 : 무안군 일로읍 망월리 청16블럭

○ 규 모 : 대지면적 21,992.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,173	-	11,173	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	11,173		11,173
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투자 사업 군 심사

○ 공유재산관리계획 수립

○ 중장기계획 수립

○ 부지매입 완료

사업명

구)무안고등학교 부지매입

담당자

세무회계과 최문수(☎450-5382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안군 조직개편에 따른 국∙과 신설에 따라 기관∙사회단체 및 일부        국∙과 사무실로 이용하기 위하여 구)무안고등학교를 매입하여 활용

○ 추후 노인복지∙문화∙체육시설로 활용하고 운동장은 주차장과 트랙,        풋살장, 실외운동기구 설치로 주민들의 생활체육공간으로 활용

○ 체육관은 개보수하여 남자학생부 핸드볼팀 연습공간 및 동호회원들의        생활체육 공간으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2020.

○ 위 치 : 무안군 무안읍 교촌리 205-1번지 일원

○ 규 모 : 토지 13,131㎡, 교실본동(3층)1동, 창고1동, 관사1동, 체육관(2층)1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,176백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,176	-	2,176	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,176		2,176
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 구)무안고등학교 매입계획 수립

○ 구)무안고등학교 매입관련 전라나도교육청 협의완료

○ 중장기계획 수립

○ 지방재정 투자사업 군 심사완료

○ 공유재산관리계획 수립

○ 부지매입 완료

사업명

청화대종사 기념사업

담당자

문화체육과 한성도(☎450-4099)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안 출신으로 ‘40년간 장좌불와’, ‘하루 일종식’, ‘염불선의 실천자’등 수많은 수식어가 따르는 선지식인으로 진리를 추구한 사상가이자 교육자인 청화스님의 업적과 뜻을 기리고, 사상과 수행법의 재해석을 통해 교육‧문화‧관광자원으로 조성‧발전시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 운남면 성내리 산76-7번지(혜운사 일원)

○ 규 모 : 부지 약 5,000㎡, 건축면적 750㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,300			2,000	3,300
국 비
시 도 비	2,120			800	1,320
시군구비	3,180			1,200	1,980
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 전라남도 투자 심사 의결                : 2019.  9.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료        : 2020.  9.

○ 무안군 건축 공공기획 심의 완료         : 2020. 10.

○ 설계공모                               : 2020. 11. ~ 2021.  1.

○ 실시설계용역 착수                      : 2021.  2. ~ 2021. 10.

□ 향후계획

○ 전라남도 계약심사 의뢰                : 2021.  9.

○ 실시설계용역 완료                     : 2021. 10.

○ 공사 발주                              : 2021. 11.

○ 공사 완료                             : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	5,900	5,300
사업기간	2012 ~ 2021	2020 ~ 2022

사업명

무안 문화원 건립사업

담당자

문화체육과 한성도(☎450-4099)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 고유문화의 계발‧보급‧보존‧전승‧선양 등 지역문화 창달을 통한 문화 발전을 주도하고 무안문화원의 원활한 사업 추진을 위해 전용건축물 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 무안군 무안읍 성남리 812-13번지 일원

○ 규 모 : 시설면적 1,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		103	1,522	1,375
국 비
시 도 비	1,200		41	609	550
시군구비	1,800		62	913	825
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 전라남도 투자 심사 의결                      : 2019.  9.

○ 실시설계 용역 완료                           : 2021.  6.

○ 공사 발주                                    : 2021.  6.

□ 향후계획

○ 공사 완료                                    : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	비고
사업기간	2020 ~ 2021	2020 ~ 2022

사업명

작은영화관 건립사업

담당자

문화체육과 한성도(☎450-4099)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최신영화 상영이 가능한 작은 영화관 건립으로 지역주민의 영화문화 향유권 강화와 관내 극장이 부재함에 따라 발생하는 지역 간 문화격차 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 무안읍 성남리 813-2번지 (구 전통시장 부지)

○ 규 모 : 시설면적 600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,690		69	1,621
국 비
시 도 비	650		22	628
시군구비	1,040		47	993
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 전라남도 투자 심사 의결                      : 2019.  9.

○ 실시설계 용역 완료                           : 2021.  6.

○ 공사 발주                                    : 2021.  6.

□ 향후계획

○ 공사 완료                                    : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	비고
총사업비	2,000	1,690
사업기간	2020 ~ 2021	2020 ~ 2022

사업명

무안군립도서관 건립

담당자

문화체육과 선연용

(☎450-5465)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다수 군민의 이용이 편리하고 접근성이 좋은 무안읍에 무안군 대표도서관을        건립하여 지역사회 독서문화 진흥 및 책 읽는 도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 무안군 무안읍 성남리 813-2 일원(구 전통시장)

○ 규 모 : 건축면적 1,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비	1,600		42	1,210	348
시 도 비
시군구비	2,400		63	1,815	522
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 :  ‘21. 6.

○ 도서관 건립사업 건축, 전기, 통신, 소방공사 계약 완료 : ‘21. 7.

□ 향후계획

○ 건축, 전기, 통신, 소방공사 도급액 지급 : ‘21. 8.

○ 공사시행 : ‘21. 8.

○ 도서관 준공 : ‘23. 6.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

남악신도시 체육시설 부지매입

담당자

문화체육과 배민아(☎450-4097)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악․오룡신도시 인구 지속유입에 따른 체육시설 인프라 부족으로 주민       여가활동 및 건강증진 할 수 있는 생활체육시설 확충 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘18. ~‘24.

○ 위 치 : 삼향읍 남악리 2598번지

○ 규 모 : 지하1층~지상3층/7,970.24㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	35,400	6,767		1,560	27,073
국 비	8,260			160	8,100
시 도 비
시군구비	27,140	6,767		1,400	18,973
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘18.11.~’19.12. : 타당성조사 및 기본계획수립용역 시행

○ ‘19. 12. 30. : 부지매입 완료

○ ‘20. 11.  4. : 중앙투자심사 조건부승인(행안부)

○ ‘21.  4. 15. ~ 6. 21.: 조달청 설계공모

○ ‘21.  6. : 설계용역 계약체결 및 착수

□ 향후계획

○ ‘22. 3.  : 설계용역 완료

○ ‘22. 5.  : 공사착공

○ ‘24. 12. : 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

무안 노을길 관광테마공원 조성사업

담당자

관광과 정남진(☎450-5479)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2013년 무안군 개발촉진지구로 지정된 무안 노을길 조성사업의 일환으로       추진중인 노을길 주변의 아름다운 해안경관과 노을을 감상할 수 있는 전망대와        해송숲을 이용한 힐링의 장소 조성으로 관광 수요창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 무안군 망운면 송현리 목서리 일원

○ 규 모 : 11,599㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,700	1,614	2,023	1,063
국 비	2,400	807	1012	532
시 도 비
시군구비	2,300	807	1011	531
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본계획수립 용역 : 2017. 3. ∼ 5.

○ 지방재정투자심사 완료 : 2017. 8. 23.

○ 군 공유재산 관리계획 심의 완료 : 2018. 4.

○ 주민설명회(망운면사무소 회의실) : 2018. 11.

○ 사업 착공(2018년분) : 2019. 1. 7.

○ 2차분 사업착수 : 2019. 4. 03.

○ 3차분 사업착수 : 2020. 2. 26.

○ 1,2차분 준공 : 2020. 12. 28.

□ 향후계획

○ 노을길 관광테마마공원 야영장 관리 및 운영 조례 제정 : 2021. 4.

○ 총괄 및 3차분 준공 : 2021. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요 변경사항
<총사업비>	4,261,173	4,523,883	262,710	․ 낙지조형물 변경 ․ 기존 낙지파고라 보수 ․ 야영장 조성 ․ 스타패스 포장 수량 증가 ․ 물가변동 인상분 반영 등
도 급 액	3,311,528	3,633,271	321,743
관급자재대	929,303	864,548	감 64,755
폐기물처리	20,342	26,064	5,722

구 분	당 초	변 경	증․감	주요 변경사항
<총사업비>	4,523,883,000	4,728,448,000	204,565,000	․ 상하수도 추가공사 ․ 야영데크난간 추가 ․ 외덕1공원 삭제 ․ 파고라 삭제 ․ 물가변동 인상분 반영 등
도 급 액	3,633,271,000	4,023,746,000	390,475,000
관급자재대	864,548,000	678,638,000	감 185,910,000
폐기물처리	26,064,000	26,064,000	0

사업명

사교천 생태하천복원사업

담당자

환경과 박성기(☎ 450-5563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천내 이·치수 기능 확보, 수질개선 및 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ～ 2022

○ 위 치 : 무안군 일로읍 복용리 2648일원(사교

○ 규 모 : L=2.8㎞, 부지매입 225,069㎡(72필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,976백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,976	262	6,063	1,975	1,676
국 비	4,988	131	3,031.5	987.5	838
시 도 비
시군구비	4,988	131	3,031.5	987.5	838
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사교천 생태하천복원사업 착수                         : 2020.  4.

○ 편입토지 매입(73필지중 70필지)                       : 2020.  5.

○ 건설사업 관리용역 착수                               : 2020.  8.

○ 연약지반처리공법(P. B. D)완료 및 제방성토작업        : 2021.  3.

□ 향후계획

○ 비점오염 저감시설 설치작업                           : 2021.  6.

○ 배수구조물 설치작업(배수통관, 암거)                    : 2021. 10.

사업명

청계3농공단지 조성사업

담당자

지역경제과 주금태(☎450-5757)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청계·청계2농공단지 인접개발에 따른 연관 산업 투자확대와 소규모 투자자에게 산업용지의안정적인 공급으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년(사업중단)

○ 위 치 : 무안군 청계면 청수리 산43-6번지 일원

○ 규 모 : 165,000㎡(산업 94,585㎡ 공공 70,415㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,200	15,200
국 비
시 도 비
시군구비	15,200	15,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(사업중단)

○ 기본 및 실시설계용역: 2018. 6. 28. ~2019. 4. 23.(용역중지2019.2.19.)

○ 지질현황측량 및 토질조사: 2019. 4. ~ 7.

○ 군정조정위원회 심의: 2019. 8. 19.

○ 토질(보링) 2공 추가 조사: 2019. 10. 8.

○ 군정조정위원회 사업승인 취소: 2019. 11. 25

사업명

청계농공단지 기숙사 신축사업

담당자

지역경제과 이지윤(☎450-5758)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농공단지 내 근로자에게 안정적인 정주시설을 제공하여 출·퇴근 불편해소 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. ~ 2020. 8.

○ 위 치 : 무안군 청계면 청수리 560-7번지

○ 규 모 : 건축면적 1,402.80㎡(3층), 기숙사(28실), 관리실, 회의실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,656백만원(특교 500 도비 200 군비 2,956)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	3,500	1,300
국 비	500	500
시 도 비	200	200
시군구비	4,100	2,800	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계용역 : 2017. 11. 2. ~ 2018. 5. 30.

○ 청계농공단지 기숙사 신축 공사 추진 : 2019. 9. 16. ~ 2020. 8. 31.

○ 기숙사 신축공사 준공 : 2020. 8. 31.

○ 기숙사 입주 및 운영 : 2021. 3. 2.

사업명

무안 항공특화산업단지 조성사업

담당자

지역경제과 최현성(☎450-5803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안국제공항을 중심으로 선진국형 지식기반산업인 항공정비산업 및 항공연관산업을 지역특화 선도산업으로 육성하여 공항 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 무안군 망운면 피서리 일원

○ 규 모 : 350,688㎡(산업시설용지 285,832㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	44,800	12,461	10,031	9,180	13,128
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  76%)

○ 2018. 06. : 기본 및 실시계획용역 등 관련 용역 시행

○ 2018. 08. : 공유재산관리계획, 지방재정투자심사 승인

○ 2019. 04. : 투자기업 선정 및 협약 체결

○ 2019. 05. : 편입토지 및 지장물 감정평가 및 보상 시행

○ 2019. 06. : 산업입지정책심의회 산업단지 지정계획 반영 / 국토교통부

○ 2020. 06. : 지역산업단지계획심의위원회 심의 및 승인 / 전라남도

○ 2020. 11. : 공사착공

○ 2021. 03. : 건설사업관리용역 착수

○ 2021. 05. : 문화재발굴조사용역 완료

○ 2021. 07. : 지방(도)토지수용위원회 재결신청

□ 향후계획

○ 토목공사

- 2021. 08.이주 조치(주택 8세대), 건물철거, 토공작업

○ 2021. 08. : 산업용지 선 분양계약

○ 2022. 06. : 산업시설용지(행거시설, 정비창) 우선 마무리

사업명

몽탄농공단지 공공폐수 연계처리 관로시설

담당자

지역경제과 주금태(☎450-5757)

□ 사업목적 및 필요성

○ 몽탄농공단지 오·폐수를 무안공공하수처리장으로 연계처리함으로써 농공단지 입주업체의 유동적 폐수발생에 대처하고 안정적 폐수처리를 통한 기업하기 좋은 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 무안군 몽탄면 학산리 893번지 일원

○ 규 모 : 관로 L=5.5㎞, 중계펌프장 1개소, 예비저장소 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,193백만원(국고 1,877 군비 1,316)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,193	180	400	1300	1,313
국 비	1,877		400	800	677
시 도 비
시군구비	1,316	180		500	636
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2018. 1. 3.

○ 무안 하수처리장 연계처리 결정 / 영산강유역환경청 : 2018. 12. 21.

○ 무안 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2020. 7. 17.

○ 공공폐수 연계처리시설 설치사업 재원협의 완료 : 2021. 4. 15.

□ 향후계획

○ 2021. 8.  설계안전성 심사 / 국토안전관리원

○ 2021. 9.  계약심사 및 일상감사 / 전라남도

○ 2021. 10.  사업인가고시 / 전라남도

○ 2021. 10.  공사발주 및 준공(차수분)

사업명

무안군 화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

건설교통과 김두을(☎450-5678)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 운수사업 기반조성 및 주차난 해소를 위해 무안군 관내에 화물자동차 공영차고지를 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 전남 무안군 일로읍 용산리 1368번지 일원

○ 규    모 : (매입) 67,000㎡ / (조성) 35,000㎡

○ 기    간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

○ 내    용

- 주 차 장 : 314면(소형 165, 중형 104, 대형 45)

- 부대시설 : 관리동, 수리동, 주유동 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,300	0	31	715	9,554
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	7,210	0	0	500	6,710
시군구비	3,090	0	31	215	2,844
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계 용역 추진중)

○ 2020.  4. : 타당성조사 용역

○ 2020.  6. : 균특회계 지방이양사업 예산신청

○ 2020.  9. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 10. : 지방재정투자사업 투자심사(도) 조건부(2단계) 의결

○ 2020. 11. : 일로읍 사전주민설명회

○ 2021.  2. : 문화재 지표조사 용역 시행

○ 2021.  3. : 보조금 교부신청(균특(전환) 예산 5억 확보)

○ 2021.  5. : 기본 및 실시설계 용역 시행계획 수립

○ 2021.  5. : 군 공유재산 관리계획 수립

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 지방재정투자사업 도 투자심사(2단계)

○ 2022.  1. : 편입토지 보상 추진

○ 2022.  7. : 공사 착공

사업명

낙지골목 주변 대형버스 공영주차장 조성사업

담당자

건설교통과 기경서(☎450-5457)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차공간 확보를 통한 상권 이용 군민과 이용객의 불편을 해소하고 주변       상권에 대한 접근성을 높여 지역경제 활성화에 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년(2년간)

○ 위 치 : 무안군 무안읍 성동리 885-8번지외 15필지

○ 규 모 : 1층 2단 주차타워 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,400			600	2,800
국 비	1,700			300	1,400
시 도 비
시군구비	1,700			300	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 주차장 부지 매입 : 2020. 12.

○ 기본 및 실시설계 : 2021. 1. ~

○ 건물철거 및 폐기물 처리 : 2021. 6.

□ 향후계획

○ 공사 착공 및 준공 : 2022. 1. ~ 2022. 9.(9개월)

□ 사업변경 내역(의뢰 중)

구 분	당 초	변 경	사 유
위 치	무안읍 성동리 885-8번지외 15필지	무안읍 성동리 885-8번지외 13필지	·당초 사업계획부지 미 수용으로 대지면적 축소 ·당초 사업계획인 2층3단 주차타워 건립시 사업비 초과 발생
면 적	3,497㎡	3,377㎡
사업량	2층 3단, 210면	1층 2단, 115면

사업명

가고 싶은 섬 가꾸기

담당자

해양수산과

이상휘 (☎ 061-450-5628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 고유의 생태자원을 보전하고 지역특성을 살린 테마를 활용한 명품 섬 개발로 도서민의 삶의 질 향상과 소득 증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 망운면 탄도리 일원

○ 규    모 : 1식

○ 기    간 : 2019 ~ 2023년(5년간)

○ 내    용 : 주민역량강화교육, 감탄점빵운영, 도선건조, 낚시체험장 조성,

마을기업설립, 다목적방문객센터 건립 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	-	42	2,358	1,600
국 비
시 도 비	2,000	-	21	1,179	800
시군구비	2,000	-	21	1,179	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 수립 및 전라남도 승인 : 2019. 10.

○ 총괄 실시설계용역 착공 : 2020. 7.

○ 도선건조 착공 : 2021. 3.

□ 향후계획

○ 도선건조 준공 : 2021. 8.

○ 총괄 실시설계용역 준공 : 2021. 9.

○ 세부사업별 착공 : 2021. 10.

사업명

도서종합개발사업

담당자

해양수산과

장성욱 (☎ 061-450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서의 어업 및 생활 기반시설의 정비․확충으로 도서민의 정주여건을 개선하고 도서 관광객 유입을 증대시켜 소득 창출에 이바지하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 망운면 탄도리 일원

○ 규    모 : 1식

○ 기    간 : 2018 ~ 2027년(10년간)

○ 내    용 : 해안탐방데크 건설, 캠핑장기반시설, 복지회관리모델링,

마을환경정비, 호안정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,875백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,875	472.5	896.25	631.25	1,875
국 비	3,100	378	717	505	1,500
시 도 비	387.5	47.25	89.625	63.125	187.5
시군구비	387.5	47.25	89.625	63.125	187.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018 ~ 2020년

- 해안탐방테크 설치 : 768백만원(L=294m, 광장데크 1개소)

- 호안정비사업 : 600백만원(L=360m)

□ 향후계획

○ 탐방테크사업 : 431백만원(L=200m)

○ 도선 선착장정비 : 200백만원(L=50m)

사업명

무안 수산물 위판장 건립

담당자

해양수산과

곽 건(☎ 061-450-5622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 수산물 위판장의 부재에 따라 어업인 계통출하 및 산지유통의 어려움

○ 안전한 수산물 공급과 어업소득증대를 위한 거점수산물 위판장 건립

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 해제면 만송로 838-19

○ 규    모 : 부지 4,556㎡, 연면적 1,106㎡

○ 기    간 : 2018 ~ 2021

○ 내    용 : 수산물 위판장 건립 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원(국비 1,400 군비 1,050 자담 1,050)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,337		3,337	-	-
국 비	1,335		1,335
시 도 비
시군구비	1,001		1,001	-	-
지 방 채
민간자본	1,001		1,001	-	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 수산조정위원회 심의 및 사업자 확정 : 2018. 3.

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2019. 11.

○ 위판장 건립 및 감리용역 계약 체결 및 착공 : 2019. 12.

○ 건축물사용허가 및 사업준공 : 2021. 6. ~ 7.

□ 향후계획

○ 집행내역 회계검증 및 정산 : 2021. 8.

사업명

어업지도선 전남217호 대체 건조

담당자

해양수산과

곽 건(☎ 061-450-5622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어업지도선 노후화로 불법어업 지도․단속 및 어업인 안전사고 발생에 대한 신속한 대응이 어려운 실정으로 어업지도선 신규건조하여 대응 강화

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 어업지도선 1척 / 29톤

○ 기    간 : 2019. 10. 17. ~ 2020. 6. 13.

○ 내    용 : 어업지도선 선체(알루미늄), 기관(디젤), 추진기(워터제트) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,318백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,318		2,318	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,318		2,318	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 어선 건조발주 허가신청 : 2019. 10.

○ 대체건조 착공 : 2019. 10.

○ 어선검사, 무선국 허가신청, 어선 등기 및 등록 : 2020.  5.

○ 대체건조 준공 : 2020. 6.

□ 향후계획

○ 어업지도선 이용 지도․단속 및 안전사고 예방 활동

사업명

도원지구 연안정비사업

담당자

해양수산과

이상휘(☎450-5628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고

연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023(4년)

○ 위 치 : 전남 무안군 운남면 성내리 일원

○ 규 모 : 연안정비 L=0.649km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비	1,750	54	370	1,327	-
시 도 비
시군구비	750	23	158	568	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시계획 승인(해양수산부) : 2020. 8.

○ 사업 착공 : 2021. 10.

○ 사업대상지 성토 중

□ 향후계획

○ 2021. 9월 기성준공 예정

○ 2022. 10월 준공 예정

사업명

용정지구 연안정비사업

담당자

해양수산과

이상휘(☎450-5628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고

연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023(4년)

○ 위 치 : 전남 무안군 현경면 용정리 일원

○ 규 모 : 연안정비 L=1.07km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비	2,100	57	815	1,229	-
시 도 비
시군구비	900	24	349	526	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 실시계획 승인(해양수산부) : 2020. 7.

○ 사업 착공 : 2021. 9.

○ 피복석 설치중 L=600m

□ 향후계획

○ 2021. 9월 기성준공 예정

○ 2022. 9월 준공 예정

사업명

가입지구 연안정비사업

담당자

해양수산과

이상휘(☎450-5628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고

연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023(5년)

○ 위 치 : 전남 무안군 현경면 마산, 용정리 일원

○ 규 모 : 연안정비 L=1.17km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비	2,380	144	86	1,190	960
시 도 비
시군구비	1,020	62	37	510	411
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 실시계획 승인(해양수산부) : 2020. 10.

○ 사업 착공 : 2020. 12.

○ 피복석 설치 중 L=400m

□ 향후계획

○ 2021. 9월 기성 준공예정

○ 2022. 12월 준공예정

사업명

신월항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과

장성욱 (☎ 061-450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌은 바다, 섬, 자연경관, 해양레저, 수산자원 등의 다양한 해양관광자원을 보유하고 있어 성장 잠재력이 풍부하나,

○ 잠재력을 발현시키고 이를 통해 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는 기본적 인프라 및 콘텐츠가 절대적으로 부족한 실정

○ 이에 따라 어촌지역을 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키기 위한‘어촌뉴딜 300사업’추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 운남면 내리 일원(신월항)

○ 범    위 : 20ha

○ 기    간 : 2019년~2021년(3년)

○ 내    용 : 선착장 147m 확장 및 증고, 방파제 100m 신설, 어민작업 공간                  480m2 조성, 여객 편의시설 및 마르쉐시설(어부장터) 515m2조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	1,750	2,250	1,000
국 비	3,500	1225	1575	700
시 도 비	450	158	203	90
시군구비	1,050	368	473	210

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 최종 사업대상지 선정 : 2018. 12.

○ 기본계획 및 실시설계용역 추진 : 2019. 3. ~ 2020. 3.

○ 공유수면 점․사용 및 해역이용협의 : 2019. 10. ~ 2020. 5.

○ 생활SOC 토목공사 착공 : 2020. 7.

□ 향후계획

○ 생활SOC 토목공사 준공 : 2021. 12.

사업명

마산~용정지구 연안정비사업

담당자

해양수산과

이상휘(☎450-5628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고

연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023(4년)

○ 위 치 : 전남 무안군 현경면 마산, 용정리 일원

○ 규 모 : 연안정비 L=1.04km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,522백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비	1,765	-	93	484	1,188
시 도 비
시군구비	757	-	40	207	510
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시계획 승인(해양수산부) : 2021. 3.

○ 사업 착공 : 2021. 5.

○ 부대시설 설치 중

□ 향후계획

○ 2023. 5월 준공예정

사업명

곡지지구 연안정비사업

담당자

해양수산과

이상휘(☎450-5628)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해일, 파랑, 해수등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하고

연안을 쾌적하게 이용할 수 있도록 친수공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023(4년)

○ 위 치 : 전남 무안군 현경면 오류리 일원

○ 규 모 : 연안정비 L=1.161km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비	2,723	-	104	543	2,076
시 도 비
시군구비	1,167	-	44	232	891
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실시계획 승인(해양수산부) : 2021. 5.

○ 사업 착공 : 2021. 7.

○ 부대시설 설치 중

□ 향후계획

○ 2023. 6월 준공예정

사업명

닭머리항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과

장성욱 (☎ 061-450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어민들의 원활한 어로활동 보장으로 어업기반 안정화 및 어촌 활성화

○ 고유자원의 관광 자원화를 통한 지역 활성화

○ 지속 가능한 어촌․어업 기반 마련

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 해제면 대사리 일원(닭머리항)

○ 범    위 : 274ha

○ 기    간 : 2020년~2022년(3년)

○ 내    용 : 방파제 신설 130m, 물양장 신설 686m2, 부잔교 신설 70m,

크레인 2개소 (20T 1개, 10T 1개)신설, 안전시설 정비, 다목적                  센터 198m2 신축, 쉼터 297m2 조성, 동백벼슬길 안내판 6개

설치, 닭머리 풍향계 1개소 설치 ,SW사업 1식, 사업지원 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,581백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,581		1,987	3,032	2,562
국 비	5,306		1391	2122	1793
시 도 비	683		178	272	230
시군구비	1,592		417	637	538

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 최종 사업대상지 선정 : 2019. 12.

○ 지방재정투자심사 : 2020. 1.

○ 기본계획 수립 : 2020. 1. ∼ 9.

○ 실시설계 용역 추진 및 공유수면 점․사용 및 해역이용협의 : 2020. 10. ∼ 2021. 6.

○ 생활SOC 토목공사 착공 : 2021. 7.

□ 향후계획

○ 다목적센터(건축) 실시설계용역 준공 : 2021. 12.

○ 다목적센터(건축) 착공 : 2022. 2.

○ 생활SOC 토목공사 준공 : 2022. 7.

○ 다목적센터(건축) 준공 : 2022. 8.

사업명

도리포항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과

장성욱 (☎ 061-450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 어업편의 ․유통 거점 플랫폼 조성

○ 어민문화 복지 및 정주여건 개선

○  지역 자원을 활용한 관광 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 해제면 송석리 일원(도리포항)

○ 범    위 : 267ha

○ 기    간 : 2020년~2022년(3년)

○ 내    용 : 선착장 20m 연장, 물양장 2,490m2 조성, 부잔교 80m 설치, 크                 레인 설치, 해수 소통구 2개소설치, 송계 마을회관 235m2 리                 모델링, 야회 쉼터 100m2 정비, 도리포항 안내판 설치, 도리포                 입구 이정표 설치, 여행자 쉼터 조성, 바다 조명 1개 설치, 방                 파제 안전펜스 295m 설치, 조명타워 1개설치, 화단 및 주차장                 정비 1식, 상가 간판 정비 외관정비, 도리포 특산품 판매장                   481m2 조성, s/w 사업 1식, 사업지원 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,548 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,548		3,229	5,019	4,300
국 비	8,784		2260	3513	3010
시 도 비	1,129		291	452	387
시군구비	2,635		678	1054	903

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○  최종 사업대상지 선정 : 2019. 12.

○  지방재정투자심사 : 2020. 1.

○  기본계획 수립 : 2020. 1. ∼ 9.

○  실시설계 용역 추진 및 공유수면 점․사용 및 해역이용협의 : 2020. 10. ∼ 2021. 6.

○  생활SOC 토목공사 착공 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 특화사업 실시설계용역 준공 : 2021. 10.

○ 특산품 판매장 공사착공 : 2021. 12.

○ 마을회관 리모델링 : 2022. 2.

○ 특산품 판매장 공사준공 : 2022. 6.

○ 생활SOC 토목공사 준공 : 2022. 8.

사업명

송현항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과

장성욱 (☎ 061-450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안군 어촌뉴딜 300사업과 관련하여 송현 마을의 역량 강화 등을 통하여     지역의 적정 사업 규모를 제시하고 합리적인 개발모델과 투자 결정 등 종     합리적인 사업계획을 수립하며, 이를 통해 성공적인 마을 발전 사업을 추     진하고  지역 활성화를 견인하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 망운면 송현리 일원(송현항)

○ 범    위 : 5.2ha

○ 기    간 : 2020년 ∼ 2022년(3년)

○ 내    용 : 조금나루 선착장 100m 증고, 호안축조 부지조성 968m2, 선착장                  연장 10m, 대합실 및 화장실 조성 30m2, 부잔교 설치 30m, 송                  현선착장 180m 증고, 선양장 개축 27m, 방파제 연장 10m, 물양                  장 460m2 조성, 선착장 신설 90m, 다목적복지센터 300m2,어민                  대기실 30m2, 마을안길정비 1,630m, 주차장 300m2 정비, 종합                   안내판 2개소, 방향표지판 10개소, 갯벌체험장 1,500m2 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,555백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,555		2,980	4,622	3,952
국 비	8,088		2,086	3,235	2,766
시 도 비	1,040		268	416	356
시군구비	2,427		626	971	830

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 최종 사업대상지 선정 : 2019. 12.

○ 지방재정투자심사 : 2020. 1.

○ 기본계획 수립 : 2020. 1. ∼ 9.

○ 실시설계 용역 추진 및 공유수면 점․사용 및 해역이용협의 : 2020. 10. ∼ 2021. 6.

○ 생활SOC 토목공사발주 계약심사 의뢰(조달청) : 2021. 7.

□ 향후계획

○ 생활SOC 토목공사 착공 : 2021. 9.

○ 다목적복지센터(건축) 실시설계용역 준공 : 2021. 10.

○ 다목적복지센터 공사 착공 : 2021. 12.

○ 다목적복지센터 공사 준공 : 2022. 6.

○ 생활SOC 토목공사 준공 : 2022. 9.

사업명

영해항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과

장성욱 (☎061-450-5613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역의 열악한 공공서비스 여건

○ 어촌 사회의 붕괴와 지역 인구 소멸의 위기 극복으로 지속 가능한 어촌으로 성장

○ 어촌의 낮은 삶의 만족도 제고로 지역만의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 운남면 동암리 일원(영해항)

○ 범    위 : 162,200m2

○ 기    간 : 2020년 ∼ 2022년(3년)

○ 내    용 : 방파제 연장 30m, 부잔교 연장 30m, 영해 어울림 센터 120m2                  조성, 주차장 376m2조성, 화장실 리모델링 1식, 지압로                       150m 조성, 공원 바닥 정비 400m2, 일출 포토존 1식, 해변                    이음 테크 설치 80m, SW사업 1식, 사업지원 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,594백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,594		1,490	2,238	1,866
국 비	3,916		1043	1567	1306
시 도 비	503		134	201	168
시군구비	1,175		313	470	392

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 최종 사업대상지 선정 : 2019. 12.

○ 지방재정투자심사 : 2020. 1.

○ 기본계획 수립 : 2020. 1. ∼ 9.

○ 실시설계 용역 추진 및 공유수면 점․사용 및 해역이용협의 : 2020. 10. ∼ 2021. 6.

○ 공통사업 내 사업물량 조정(기본계획 변경고시) : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 생활SOC 토목공사 착공 : 2021. 9.

○ 영해어울림센터(건축) 실시설계용역 준공 : 2021. 12.

○ 영해어울림센터(건축) 착공 : 2022. 2.

○ 영해어울림센터(건축) 준공 : 2022. 8.

○ 생활SOC 토목공사 준공 : 2022. 7.

사업명

무안읍 전통시장 진입도로 개설공사

담당자

지역개발과 변성수 (☎450-5770)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안읍 전통시장 이전으로 인한 교통량 급증 및 주변상권의 활성화를 위한 교통망 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2020. 4.

○ 위 치 : 무안군 무안읍 성내리 24-14 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=330m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	694	578	116	0	0
국 비	500	435	65	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	194	143	51	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업착공 : ‘19. 3.

○ 도로 L=330m, B=10.0m 개설 완공 : ‘20. 4.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2019.1.3.∼2020.1.2.	2019.1.3.∼2020.5.21.	우천
사 업 비	650백만원	694백만원	증 44백만원 구간 연약지반 치환 등

사업명

해안관광 둘레길 조성

담당자

지역개발과 서재웅(☎450-5778)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군의 아름다운 해양·생태관광자원과 향토문화를 연결하고 자전거 및 걷기       열풍 등을 반영한 둘레길 형태의 산책로를 조성

○ 해양생태자원과 마을의 문화자원 등을 활용한 관광개발 및 관광객 유치로       지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.(4년간)

○ 위 치 : 삼향읍, 청계면, 망운면 일원

○ 규 모 : 2개노선 32.4km

- 1구간 : 초의다도 문화길(20.0km), 2구간 : 톱머리단 노을길(12.4km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원(도비 1,500, 군비 1,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,200	105	630	928	1,537
국 비
시 도 비	1,500		269	464	767
시군구비	1,700	105	361	464	770
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ `20. 05. : 실시설계 및 조사측량 용역 완료

○ `20. 05. : 청계면 복길리구간 조성사업 착수

○ `21. 05. : 톱머리~하늘바다펜션 구간 조성사업 착수

○ `21. 05. : 아일랜드빌리지~초의선사 구간 조성사업 착수

□ 향후계획

○ `21. 09. : 청계면 복길리구간 조성 사업완료

○ `22. 02. : 하늘바다펜션~해비치 구간, 해비치 펜션~금동마을 구간 사업 발주

○ `22. 12. : 톱머리~하늘바다펜션, 아일랜드빌리지~초의선사 구간 조성사업 완료

사업명

무안갯벌생태문화체험 전시관 확충사업

담당자

생태갯벌사업소 문세영(☎450-5647)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낡고 노후 된 전시시설물을 무안갯벌의 특성과 생물다양성을 살린 테마형 전시공간으로 연출하여 전문과학관으로서 위상 도모 및 관광 자원 확충에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.1 ~ 2020.12

○ 위 치 : 해제면 유월리 만송로 36 (무안생태갯벌과학관)

○ 규 모 : 1,534.74㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,798	3,020	778
국 비	1,899	1510	389
시 도 비
시군구비	1,899	1510	389
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전시물 제작설치 공모선정 : 2018. 6. 28

○ 전시물 제작설치 실시설계 : 2018. 7. 30 ~ 2019. 5. 30

○ 시설물 철거 및 전시물 제작설치 착수(2019년분) : 2019. 7. 26

○ 전시물 제작설치 준공 : ‘2020.3.10

□ 향후계획

○ 무안생태갯벌과학관 전시관 개방 및 상설 프로그램 운영 : ‘20. 4. ~

○ 무안갯벌 특성화 프로그램 개발 및 운영

- 갯벌과 웹툰 ․ 생물 증강현실 프로그램 개발   : 2021. 6. ~ 8.

- 무안갯벌 특성화 진로체험 프로그램 개발 운영    : 2021. 5. ~ 10.

사업명

무안갯벌 탐방다리 설치공사

담당자

생태갯벌사업소 김길중(☎450-5642)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안황토갯벌랜드와 갯벌탐방로 종단부의 바닷길을 연결하여 관광인프라를 구축하고 갯벌도립공원 활성화를 통하여 서남해안지역의 해양관광명소를 개발하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 무안군 해제면 유월리 ~ 현경면 가입리

○ 규    모 : 탐방다리 L=1.44㎞, B=2.4m

○ 기    간 : 2020.  ~ 2023.

○ 내    용 : 갯벌탐방다리 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800		262	1,970	7,568
국 비
시 도 비	4,900		2	1,098	3,800
시군구비	4,900		260	872	3,768
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : )

○ ‘2020. 1.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘2021. 3. 18. : 습지보호지역 행위 승인(해양수산부)

○ ‘2021. 4.  2. : 무안군 경관심의 완료

○ ‘2021. 7. 15. : 자연환경에 미치는 영향평가 완료(전라남도 기후생태과)

□ 향후계획

○ 전라남도 계약심사 완료             : 2021. 8.

○ 무안갯벌 탐방다리 설치공사 착수    : 2021. 8.

10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 무안군에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTO	환경관리 종합센터 운영	무안환경비젼(주)	38,387	53,282	5751	6,002	13,345	‘08.7.~ ’23.6.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

환경관리종합센터 운영

담당자

환경과 박신우 (☎061-450-5572)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활폐기물의 위생적 처리를 통하여 쾌적하고 깨끗한 무안이미지 제고

○ 재활용 분리수거 등을 통한 혼합폐기물 유입 억제로 버러지는 자원회수

□ 사업개요

기    간 : 2006. 7. ~ 2023. 6.

- 설치기간 : 2006. 7. ~ 2008. 6.

- 운영기간 : 2008. 7. ~ 2023. 6.

○ 위    치 : 전남 무안군 무안읍 몽탄로 125-33

○ 민간사업자 : 무안환경비젼(주) - BTO방식

○ 총사업비 : 38,387백만원

○ 사업규모 : 소각시설 45톤/일, 재활용시설 20톤/일, 매립시설 293천㎥,

음식물처리시설 10톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 운영기간 : 15년간 (2008. 7. ~ 2023. 6.)

- 최소수익보장내역

․운영개시후  1년 ~  5년까지 : 추정사용료의 80% 보장

․운영개시후  6년 ~ 10년까지 : 추정사용료의 70% 보장

․운영개시후 11년 ~ 15년까지 : 추정사용료의 60% 보장

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	78,380	53,282	5751	6,002	13,345
국 비
시 도 비
시군구비	78,380	53,282	5751	6,002	13,345
기 타

□ 추진단계

○ 현재 운영중

□ 향후계획

○ 각 시설의 효율적인 운영을 위하여 반입되는 폐기물 성상별 분리 철저

및 군민홍보강화